11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 장흥군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율 (%)
관산지구 소규모 수도시설개량사업	5,149	3,949	1,200		2014	2010	100
안양 면단위 하수 처리장 설치사업	3,165	1,117	2,048		2014	2010	100
안양 하수관거 정비사업	8,083	714	1,137	6,232	2017	2010	5
통합의료센터 건립사업	29,551	760	2,993	25,798	2016	2011	20
장평 제2농공단지 조성사업	3,500	1,850	1,650			2011	100
회진 수상가옥 조성사업	3,833	3,329	504			2011	100
통합의학박람회	6,150	3,450	1,300	1,400		2012	100
억불산 난대 자생 식물원 조성사업	2,500	1,600	900		2015	2012	98
대덕읍 전통시장 시설 현대화 사업	4,646	1,430	364	2,852	2015	2012	85
고읍천 생태하천 복원사업	2,981	697	1,684	600	2016	2012	60
장평면하수처리장 및 관거 정비	7,377	50	714	6,613	2017	2012	5
시설원예 품질개선사업	5,412.7	-	5,412.7	-	2014	2013	100
장흥군 공공형 승마장 조성사업	3,811	120	1,962	1,729	2016	2013	50
목재 전문 산업화 단지 조성사업	23,000	400	3,060	19,540	2016	2013	59
장흥군 도시가스 공급사업	10,640	-	-	10,640	2019	2014	50
2016장흥국제 통합의학박람회	19,000	-	300	18,700	2016	2014	28

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

관산지구 소규모

수도시설 개량사업

담당자

수도사업소

김형근(☎860-0563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 소규모 수도시설을 개량하여 광역상수도 미 공급지역 3개 마을에

맑고 깨끗한 장흥댐 물을 공급하기 위한 사업으로 식수난 해결 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 11 ~ 2015. 1. 9

○ 위 치 : 관산읍 방촌마을 외 2개마을

○ 규 모 : 상수관로L=20.7km, 배수지 1,200톤, 가압장 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,149백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,149	2,764	1,185	1,200	-
국 비	3,604	1,935	829	840	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,545	829	356	360	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 총사업기간 : ‘12. 1. 11 ~ ‘15. 1. 9

- 3차분 및 총괄 준공 : ’14. 12. 2

□ 향후계획

○ 공사 준공(‘14. 12. 2) 및 가정급수관로 추진하여 광역상수도(장흥댐) 물 공급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

안양 면단위 하수처리장 설치사업

담당자

수도사업소

이명록(☎860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관망을 체계적으로 정비하고 투자효율을 극대화하기 위해

하수도정비기본계획 수립지구에 집중 투자하여 하수처리 효율성 및

선진화 구축.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 01 ～ 2015. 2..

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 안양면 운흥리 702-5 일원

○ 규 모 : 시설용량 270톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,165백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,165	0	1,117	2,048	0
국 비	2,215		781	1,434
시 도 비			-
시군구비	950		336	614
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95%)

○ 실시설계 용역 및 행정협의 : 2011. 01. ～ 2014. 5.

○ 공사착공 : 2012. 06.

○ 공사준공 : 2015. 2.

□ 향후계획

○ 1차분 처리장 착공 및 준공 : 2013. 6. 27

○ 2차분 착공 및 준공 : 2015. 2. 5

□ 사업변경 내역 : 설계결과 기본계획 연장과 설계연장 상이, 사업비 감소

○ 당 초

- 사업규모 : Q= 270톤/일 - 총사업비 : 5,000백만원 - 사업기간 : ‘11. 01 ～ ’12. 12.

○ 변 경

- 사업규모 : Q= 270톤/일 - 총사업비 : 3,165백만원 - 사업기간 : ‘12. 06 ～ ’14. 06.

사업명

안양 하수관거 정비사업

담당자

수도사업소

이명록(☎860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안양면 하수관거를 분류식으로 정비하여 생활하수를 처리함으로써

하수처리 효율증대 및 주민 생활환경 개선에 기여하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 01 ～ 2017. 06.

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 안양면 소재지 일원

○ 규 모 : 관로 L=20.893km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,083백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,083	714	1,137	3,330	2,902
국 비	5,658	500	796	2,331	2,031
시 도 비
시군구비	2,425	214	341	999	871
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 실시설계 용역 및 행정협의 : 2011. 01. ～ 2014. 5.

○ 공사착공 : 2014. 06.

○ 공사준공 : 2017. 06.

□ 향후계획

○ 1차분 관로매설 및 준공 : 2014. 6. 30 ~ 2015. 6. 29

○ 2차분 착공 및 준공 : 2015. 4. 3 ~ 2015. 12. 31

□ 사업변경 내역 : 설계결과 기본계획 연장과 설계연장 상이, 관로 연장 증가

○ 당 초

- 사업규모 : L=14.24km - 총사업비 : 6,400백만원 - 사업기간 : ‘11. 01 ～ ’13. 12.

○ 변 경

- 사업규모 : L=21.461km - 총사업비 : 8,083백만원 - 사업기간 : ‘14. 06 ～ ’17. 06.

사업명

통합의학센터 건립

담당자

기업지원과

김민성(☎860-0387)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환자 중심의 의료서비스 제공을 위해서 양․한방, 보완대체의료 등 다양한            의료를 하나로 융합, 서비스하는 통합의료 인프라 구축 필요

○ 노인성 만성질환, 환경성질환 등 효율적 의료비용 관리와 의료서비스가

결합된 새로운 의료서비스 창출로 국내 의료 서비스 산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위 치 : 장흥군 안양면 기산리 지내

○ 규 모 : 연면적 9,203㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,551백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	29,551	3,753	8,148	12,225	5,425
국 비	20,685	2,627	5,704	8,557	3,797
시 도 비	4,433	527	1,222	1,870	814
시군구비	4,433	599	1,222	1,798	814
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 통합의학센터 건립공사(분야별) 계약체결 완료 : ’2015. 3월

○ 통합의학센터 건립공사 건설사업관리용역 계약체결 완료 : ’2015. 4월

□ 향후계획

○ 통합의학센터 위탁 공고 : 2015. 8월 ~ 9월

○ 통합의학센터 건립공사 준공 : 2016. 7월

사업명

장평 제2농공단지 조성

담당자

기업지원과

김봉열(☎860-0352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성된 장평농공단지의 규모가 협소

○ 취약한 산업구조개선으로 고용창출 및 인구유출방지

○ 중남부 낙후밀집지역 경제기반 구축으로 지역균형 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ～ 2014

○ 위 치 : 장흥군 장평면 봉림리 산1번지 일원

○ 규 모 : 47,008㎡(14,220평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,500	1,816	1,684	0	0
국 비	1,000	1,000	0
시 도 비	80	80	0
시군구비	2,420	736	1,684
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 설계용역(기본 및 실시설계, 지구단위 변경)         2011.  6.

○ 장평농공단지 확장 대상지 확정 및 지구지정        2012. 12.

○ 공사착공 및 준공                                 2014.  8.

□ 향후계획

○ 농공단지 분양                                    2015. 9.

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2011～2013	2011～2014
사 업 비	3,500	3,969

○ 변경사유 : 농공단지 조성사업에 따른 암반발생으로 사업기간 및 사업비 증가

사업명

회진 수상가옥(펜션) 조성사업

담당자

해양수산과

정지아(☎860-0409)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양낚시공원을 찾는 관광객을 위한 우리군의 차별화된 관광 숙박 편익       시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 1월 ~ 2014년 11월

○ 위 치 : 전남 장흥군 회진면 대리 해양낚시공원 일원

○ 규 모 : 펜션 4동(대형 2동 - 38평형, 소형 2동 - 9평형)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,833백만원(국비 2,210  군비 1,623)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,833	3,329	504	해 당	없 음
국 비	2,210	1,947	263
시 도 비
시군구비	1,623	1,382	241
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 사업완료

□ 향후계획

○ 태풍 ‘나크리’ 피해 미보수 대형펜션 1동 수리 후 운영

□ 사업변경 내역

○ 당 초

- 사업규모 : 3,830백만원(국비 2,210  군비 1,620)

- 사업기간 : 2010년 ~ 2012년

○ 변 경

- 사업규모 : 3,833백만원(국비 2,210  군비 1,623)

- 사업기간 : 2010년 1월 ~ 2014년 11월

사업명

통합의학박람회

담당자

기업지원과

주성환(☎860-0874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생약초․한방산업을 활발하게 추진하고 지역의 균형발전과 낙후되어 있는

지역 경제 활성화를 위하여 박람회 추진

○ 통합의학 관련기관 참여를 유도하여 통합의료산업의 다각적인 접근 및

건강 증진 효과에 대한 공감대 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10. 22(수) ~ 10. 28(화)

○ 위 치 : 관산읍 옥당리 천관산 입구

○ 규 모 : 218개 부스

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,550	4,750	1,400	1,400
국 비
시 도 비	3,750	2,350	700	700
시군구비	3,800	2,400	700	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 2014 대한민국통합의학박람회 개최 : 2014. 10. 22 ~ 10. 28 / 7일간

사업명

억불산 난대자생식물원 조성사업

담당자

환경산림과

김태형(☎860-0421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 억불산 편백숲 프로젝트를 추진함에 있어 자연과 조화를 이룰 수 있는

난대 자생식물원 조성 필요성 대두

○  대국민 산림서비스 및 자연체험학습 기회제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2014년

○ 위 치 : 장흥읍 우산리 산20-1번지외 1필지

○ 규 모 : 4.2ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,500	1,600	900	-	-
국 비	750	500	250	-	-
시 도 비	150	100	50	-	-
시군구비	1,600	1,000	600	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○‘12. 6. 28 ~ ’12. 12. 23 : 1차분 완료

○‘13. 3. 18 ~ ’14.  5. 26 : 2차분 완료

○‘14. 6. 28 ~ ’15.  8.  5 : 3차분 추진중 / 현재 공정율 98%

․ 홍가지정원, 허브정원, 조경식재, 포장공사

□ 향후계획

○‘15. 8월중 준공예정

□ 사업변경 내역

○해당없음

사업명

대덕읍 전통시장 현대화사업

담당자

경제정책과

이창옥(☎860-0328)

□ 필요성 및 기대효과

○ 전통시장 시설현대화 사업으로 시장 환경개선과 고객 편의 제공으로

입점상가의 매출 극대화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013년 ～ 2015년

○ 위    치 : 장흥군 대덕읍 신월리 111번지

○ 사업규모 : 시장 재건축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,646백만원(국비 3,252 시군구비 1,394)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,646	1,430	364	2,852
국 비	3,252	1,001	255	1,996
시 도 비
시군구비	1,394	429	109	856
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정율 85%, 막구조공사 추진중)

○ 기본 계획 : ‘12. 7월

○ 설계 용역 : ‘13. 4월 ~ 10월

○ 공사착공  : ‘14. 5월

□ 향후계획

○ 막구조공사 시행 : ‘15. 8월 ~ ’15. 11월

○ 시장 이주 및 주변정비 : ‘15. 11월한

○ 시장 개장 : ‘15. 12월한

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 2,860백만원 ⇒ 4,646백만원(증 1,786백만원)

/ 막구조공사, 어물전 비가림시설,  편의시설 등 추가 확충

사업명

고읍천 생태하천 복원사업

담당자

경제정책과

오병일(☎860-0496)

□ 필요성 및 기대효과

○ 치수위주의 하천정비로 인해 훼손된 하천 환경을 자영상태에 가깝게

복원하여 수질 개선 및 수생태환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 관산읍 죽교리 250-1 일원

○ 사업규모 : 자연정화습지조성 28,000㎡, 퇴적토 준설 22,000㎥,

평여울조성 250m, 부대공 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,981	697	1,684	200	400
국 비	2,087	488	1,265		280
시 도 비
시군구비	894	209	419		120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2013. 09월 : 군관리계획 변경결정 완료

○ 2013. 12월 : 사전재해영향평가(개발사업) 완료

○ 2014. 02월 : 실시설계 완료

○ 2014. 03월 : 공사착공(1차분)

○ 2015. 03월 : 공사준공(1차분)

○ 2015. 03월 : 공사착공(2차분)

□ 향후계획

○ 2016. 10월 : 사업완료 계획

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경

- 당초 : 자연정화습지조성 28,000㎡, 퇴적토 준설 22,000㎥,

평여울조성 250m, 수초재배섬 3개소, 부대공 1식

- 변경 : 생태습지 조성 28,865㎡, 호안사면정비 2,343㎡,

평여울조성 250m, 부대공 1식

사업명

장평면하수처리장 및 관거 정비

담당자

수도사업소

이명록(☎860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관망을 체계적으로 정비하고 투자효율을 극대화하기 위해

하수도정비기본계획 수립지구에 집중 투자하여 하수처리 효율성 및

선진화 구축.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01 ～ 2017. 12..

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 장평면, 장동면 일원

○ 규 모 : 시설용량 210톤/일, 하수관거L=13.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,377백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,377	50	714	1,999	4,614
국 비	5,164	-	500	1,399	3,265
시 도 비			-
시군구비	2,213	50	214	600	1,349
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2014. 01. ～ 2014. 12.

○ 하수도정비기본계획 부분변경 및 행정협의 : 2015. 1 ~ 2015. 7

○ 공사추진 : 2015. 8. ~ 2017. 12.

□ 향후계획

○ 1차분 하수처리장 및 관로매설 및 준공 : 2015. 12. 31

○ 2차분 착공 및 준공 : 2016. 1. ~ 2016. 12

○ 3차분 착공 및 준공 : 2017. 1. ~ 2017. 12

사업명

2012년 시설원예품질개선사업

담당자

농업축산과

임상록(☎860-0384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원예전문생산단지 시설의 현대화, 규모화, 전문화를 지원함으로써 원예

농산물의 품질개선 및 안정적인 수출기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2014년

○ 위 치 : 장흥군 장평면 청용리 410-1 일원

○ 규 모 : 유리온실 3.2ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,41.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,412.7	-	5,412.7	-	-
국 비	1,080.3	-	1,080.3	-	-
시 도 비	162.1	-	162.1	-	-
시군구비	1,458.5	-	1,458.5	-	-
지 방 채		-		-	-
민간자본	2,711.8	-	2,711.8	-	-
기 타		-		-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진 (유리온실 신축) : 2014. 7. ~ 12.

○ 사업준공 및 보조금 지급 : 2015. 1.

□ 향후계획

○ 시설원예 에너지이용 효율화 사업 추진(지열냉난방)

○ 온실 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

공공형승마장

(승마체육공원)조성사업

담당자

농업축산과

김세형(☎860-0394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 성장 동력인 말산업과 연계한 승마인구의 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2015년

○ 위 치 : 장흥군 안양면 기산리 일원

○ 규 모 : 부지 28,907㎡, 시설 3,687㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,811백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,811	120	1,962	1,729	-
국 비	1,850	60	590	1,200	-
시 도 비	130	12	118	-	-
시군구비	1,831	48	1,254	529	-
지 방 채					-
민간자본					-
기 타					-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1단계 사업완료(기초공사, 실내승마장, 실외승마장)

□ 향후계획

○ 2단계 사업추진(클럽하우스, 축사, 부대시설)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

목재전문산업화 단지조성사업

담당자

환경산림과

백용전(☎860-0422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 목재의 연구개발, 세계 수준의 목제품개발, 판로지원 등 산업화 추진을

통해 산림소득 향상과 국가경쟁력 강화

○ 기존 우드랜드, 목공예 공방, 전통생활가구단지와 연계하여 목재산업의

집적화를 통해 소득창출 기반 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 우산리 8번지

○ 규 모 : 연면적 2,873.33㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	23,000		400	3,060	19,540
국 비	11,500		200	1,530	9,770
시 도 비	2,300			306	1,994
시군구비	9,200		200	1,224	7,776
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 목재산업 클러스터 구축방안 학술용역 : ‘11. 11. 25 ～ ’12. 03. 03

○ 목재전문 산업화단지 기본 및 실시설계 : ‘13. 11월～ ’14. 5월

□ 향후계획

○ 창업보육센터 공사 착공 및 준공 : 2014. 8월 ~ 2016. 2월

○ 연구동 및 장비구축, R&D 용역 : 2015. 1월 ~ 2016. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장흥군 도시가스 공급사업

담당자

기업지원과

최근영(☎860-0353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부의 저탄소 녹색성장정책에 적극 동참하고 아파트 및 공동주택 등

다세대 주택에 거주하는 군민의 연료비부담 경감과 쾌적한 생태환경을

조성해 나가기 위해 도시가스 공급이 절실

○ 기업유치활성화를 위해 연차적으로 장흥 바이오식품 산업단지와 정남진

로하스타운 활성화에 따른 수요를 사전에 준비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5. 6 ~ 2019. 12. 30

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 일원(건산리, 예양리, 상리)

○ 규 모 : 3,355세대 / 관로연장 25.1km(중압 13.3, 저압 11.8)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,787백만원 /도비400, 군비4,638, 민자5,749

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,640				10,640
국 비
시 도 비	400				400
시군구비	4,575				4,575
민간자본	5,665				5,665

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 총사업기간 : 2015. 5. 6 ~ 2019. 12. 30

□ 향후계획

○ 1차 도시가스 공급 시작 : 10월말 / 12월말까지 1,857세대

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2016장흥국제통합의학박람회

담당자

조직위원회

김두섭(☎860-7508)

□ 사업목적 및 필요성

○환자중심 통합의학에 대한 국민적 공감대 형성 및 세계적 통합의학

중심지로 자리매김하고, 국민증진과 국가 통합의학 발전을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. 29 ~ 10. 31 / 33일간

○ 위 치 : 장흥군 안양면 로하스타운 일원

○ 규 모 : 부지 77,214㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	19,000	0	300	5,150	13,550
국 비	5,700			1,400	4,300
시 도 비	3,800			650	3,150
시군구비	6,000		300	3,100	2,600
지 방 채
민간자본
기 타	3,500				3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 추진중)

○ 2016장흥국제통합의학박람회 우선협상대행사 선정 : 2015. 5. 15